약속Ⅰ	군민중심의 경제‧농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.
산림자원 가공산업 육성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅰ-9	산림	군민생활은 더 풍요롭게		가평군	신규		중기		임기 내
추진부서	경제산업국		산림과	산림정책팀장	정지일(2340)		담당자		김미애(2342)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		5%

□ 추진방향

❍ 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연로, 축사깔개, 표고톱밥배지로의 활용 및

목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성

❍ 향후 가평군 소각시설 설치 시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023. ~ 2025.

❍ 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원

❍ 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성

❍ 소요예산: 3,000백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,000		3,000			1,500	1,500
국비	1,500		1,500			750	750
도비	150		150			75	75
군비	450		450			225	225
기타	900		900			450	450

❍ 사업내용

• 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한

기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	5
2023	미이용 산림자원화 센터 조성사업 공모사업 신청 접수	‧ 공모 신청접수	30	5
2024	미이용 산림자원화 센터 조성사업 추진	‧ 미이용 산림자원화센터 조성	40
2025	산림자원화센터 운영 가평군 폐기물 소각 시설과 연계 추진	‧ 산림자원가공시설 등 운영 ‧ 소각시설 여열을 이용한 스팀, 온수, 건조 등 열원 재활용 ‧ 폐기물 소각시설 설치사업과 사업 연계 추진	30

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2023	4분기	· 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 제출(신청자: 가평군산림조합) · 공모사업 최종선정 결과 탈락

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 산림청은 광역자치단체 별 1개소씩 미이용 산림자원화센터를 조성할 계획으로, 선정 이력이 없는 광역자치단체에게 가산점(우선권) 부여

❍ 2020년 파주시산림조합이 선정되어 우리군이 추가 선정될 가능성 희박

공모년도	2019	2020	2021	2022	2023	2024
선정지역	전남	경기	충남	전북	경남	경북

□ 향후계획

❍ 산림청 「2025년 미이용 산림자원화센터 조성사업」 공모계획 공고 시 가평군산림조합과

공모사업 참여 재협의

□ 기대효과

❍ 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화

기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출