약속Ⅱ	맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.
생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅱ-3	복지	지역문화는 더 다채롭게		가평군	계속		장기		임기 외
추진부서	행정복지국		행복돌봄과	복지시설팀장	최태양(2228)		담당자		조영윤(2253)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		45%

□ 추진방향

❍ 민선8기 공약사업으로 4개 권역에 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및

프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책 기여

❍ 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내

어린이 놀이시설건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리

보장과 놀이문화 조성

❍ 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고

행복한 「힐링 가평」 으로의 밝은 이미지 고취시킴

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 9. ~ 2026. 6. ※ 조종권역 ‘26.12월, 설악권역 ‘27.6월 준공 예정

❍ 사업위치: 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원, 설악면 미정

❍ 사업규모: 3개소(청평면, 조종면, 설악면)

❍ 소요예산: 26,500백만원 ※ 공약실천계획서: 26,440백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	26,500		25,106	6,000	7,896	4,900	5,450	860	1,394
국비
도비	8,896		8,896		1,896	2,000	5,000
군비	17,604		16,210	6,000	6,000	2,900	450	860	1,394
기타

• 청평면 9,860백만원, 조종면 8,210백만원, 설악면 8,430백만원

❍ 사업내용

• 실내 영유아·복합시설 건립(모험·창의 체험공간 및 놀이문화 조성)
• 사회재난 및 자연재난에 대비한 어린이 안전체험교실 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	어린이 놀이체험시설 조성 계획 수립	‧ 어린이 놀이체험시설 조성 총괄 계획수립	5	5
2023	청평·조종권역 놀이체험 시설 조성 계획 수립 및 건축설계용역 착수	‧ 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 추진계획 수립 ‧ 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 조성 사전행정절차 이행 및 설계 공모 ‧ 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 건축설계 및 전시물 제작 설치 착수	30	20
2024	청평·조종권역 놀이체험시설 설계	‧ 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 설계공모 공고 및 심사위원회 실시 - 건축설계용역 착수(2024.10.)	30	20*
	설악권역 놀이체험시설 조성 계획 수립	‧ 설악권역 어린이 놀이체험시설 - 부지선정 및 추진계획 수립, 부지매입 - 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축위원회 심의(2024.12.)
2025	청평·조종권역 놀이체험시설 착공	‧ 청평·조종권역 설계용역 완료 - 공사착공 및 준공(2025. 5. ~ 2026.10.) - 설계공모 및 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수, 완료	25
2026 상반기	청평·조종권역 놀이체험시설 준공	‧ 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 공사 준공(2026.10.) ‧ 설악권역 어린이 실내놀이체험시설 - 공사 착공 및 준공(2026. 1. ~ 2027. 6.)	10
	설악권역 놀이체험시설 준공

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적			비 고
		청평권역	조종권역	설악권역
2022	3분기	· 민선8기 공약사업 실천계획 확정(청평역 역세권 활성화 공약사업과 통합) · 공약이행평가단 제1차 회의 / 2022. 9. 27. - 내용: 키즈프로그램, 청평면 역세권 활성화(영유아 놀이터) 사업 통합 - 사유: 사업 성격 중복에 따른 공약사업 하나로 통합
	4분기	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인
2023	1분기	· 건축기획용역 착수	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인 · 지방재정투자심사 승인
	2분기	· 사업설명회 개최 · 공공건축사업계획 사전검토	· 공유재산 관리계획안 승인 · 건축기획용역 착수
	3분기		· 사업설명회 개최 · 공공건축사업계획 사전검토 · 경기주택도시공사 공공 건설지원센터 현장 방문
	4분기	· 유휴부지 활용계획 보고 · 기본계획수립용역 완료 · 설계공모 계약의뢰 · 건축기획용역 완료	· 공공건설지원센터 사전검토의견서 회신
2024	1분기	· 설계공모 공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정	· 조성계획 변경 (사업비 증액)	· 건립부지 현장조사
	2분기	· 실시설계용역 착수	· 공공건축심의위원회 심의 완료 · 건축기획용역 완료 · 공유재산 관리계획안 (변경) 승인	· 건립계획 수립 · 공유재산 관리계획안 승인
	3분기		· 설계공모 공고
	4분기	· 주민설명회 개최 · 중간보고회 개최 · 건립공사(건축) 계약체결 · 건축허가 접수 완료 · 완료보고회 개최	· 참가등록업체 미달로 설계공모 재공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정 · 건축설계 및 전시물 제작설치 계약 의뢰	· 건축기획용역 착수

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획			비 고
		청평권역	조종권역	설악권역
2025	1분기	· 공사 착공 및 준공 (~26.6월)	· 건축설계용역 착수 및 완료(~25.7월)	· 공공건축사업계획 사전검토 · 공공건축위원회 심의 · 설계공모 공고 · 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수 및 완료(~25.10월)
	2분기
	3분기		· 공사 착공 및 준공 (~26.12월)
	4분기
2026	1분기			· 공사 착공 및 준공 (25.12월~27.6월)
	2분기
	3분기
	4분기
2027	1분기
	2분기

□ 기대효과

❍ 어린이가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여 주인의식 성장과 지역에 대한

애정으로 질 좋은 양육환경 조성

❍ 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여 아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성에 기여

□ 조감도(청평권역 어린이 놀이체험시설)

□ 조감도(조종권역 어린이 놀이체험시설)