약속Ⅲ	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화・관광도시로 성장하겠습니다.
2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)
관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅲ-14	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규		중기		임기 내
추진부서	도종합체전추진단		대회기획팀장	김미경(2671)		담당자		김혜영(2673)
			대회홍보팀장	나선주(2681)				이경하(2682)
			대회운영팀장	원경원(2676)				이수종(2677)
			대회시설팀장	공중식(2672)				이종국(2674)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률		100%

□ 추진방향

❍ 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화

❍ 기존 체육시설 개․보수를 통한 최신의 체육 인프라 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.

❍ 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식

❍ 소요예산: 27,921백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	27,921		27,921		6,305	16,116	2,500	3,000
국비	1,010		1,010		500	510
도비	10,000		10,000		3,200	6,000	400	400
군비	16,911		16,911		2,605	9,606	2,100	2,600
기타

❍ 사업내용

• 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개․보수를 통한 공인 경기장 구축

• 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정

• 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	경기도 종합체육 대회 유치 준비	25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사	80	80
2023	시설 총사업비 확정 및 설계용역발주	체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주	20	20
2024	체육시설 인프라 구축 완료	24년 말까지 경기장 구축 완료	-	-
2025	대회진행 용역 발주 및 체육시설 개․보수	25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비 지출 및 용역 실시 및 체육시설 개․보수	-	-
2026	대회진행 용역 발주 및 대회종료 후 정산	26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산	-	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	4분기	· 군의회 시정연설에 대회 유치 표명
2023	1분기	· 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출 · 경기도종합체육대회 현장 실사단 방문
	2분기	· 가평군 유치 확정
	3분기	· 도민체전T/F팀 구성 · 기본계획 수립 및 대회추진단 발대식 · 경기장 개보수 대상지 전수조사 및 공사(사업완료 30개소, 추진중 1개소)
	4분기	· 경기장 실시설계용역 착수(17건) 및 준공(12건)
2024	1분기	· 개·폐회식 및 경기장 방영용 홍보동영상 제작(~24.11월) · 대회 참여 외식·숙박업소 모집(2회, 360개 업소) 및 타 시군에 리스트 제공 · 대회 홍보 민간추진단 발족식 및 캠페인 활동(8회/~24.12월) · 대회상징물 및 디자인 개발(~24.8월) · 대회추진단 부서별 추진상황 보고회(3회/~24.10월)
	2분기	· 도종합체전 조직위원회 출범식 · 종합홍보계획 수립 및 차기 개최지 홍보(~24.10월) - 경기도(장애인)체육대회 2024 파주, 경기모아뮤직페스티벌, 경기도(장애인) 생활체육대회 2024 성남, 자라섬 가을꽃페스타, 제7회 경기도민의 날
	3분기	· 경기운영 종합계획 수립, 종목별 경기 및 운영 필요 물품 수요조사, 경기장 배정 · 경기도(장애인)종목별 단체 경기장 사전답사 및 경기장 확정(수영 제외)
	4분기	· 자원봉사자 모집 시작(~25.2월) · 외식·숙박 가격 안정화를 위한 업무 협약 · 대회 공식 홈페이지 오픈 · 개·폐회식 행사 연출 대행 용역 계약 체결 · 교통매체(ITX, 경춘선) 모니터 내 대회 홍보영상 송출 · 성화 채화 및 봉송행사 용역 공고 · 경기장 시설보수 준공(30개소, 21,000백만원)

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 지하철 모니터, 경기버스(G버스) 등 생활밀착형 매체 홍보(~25.5월) · D-100 보드판 제막식 추진 · 부대행사장 설치 및 운영 추진(~25.5월) · 경기장 의료ㆍ방역ㆍ교통 대책 수립 및 추진(~25.5월) · 추진상황 4차 보고회 · 참여업소 지정 현판 배부 및 이동식경사로 대여 용역 추진 · 숙박외식업 서한문 및 선수단 환영포스터 등 배부 · 대회 홍보 현수막 및 가로기 설치, 대회 조형물 및 꽃탑 설치 · 추진상황 최종 보고회
	2분기	· 자원봉사자 및 공무원운영지원단 발대식 및 교육 · 대회 홍보 온라인이벤트 추진 · 2025 가평 도민체전 성화 채화 · 제15회 경기도장애인체육대회 2025 가평 [2025. 4. 24. ~ 4. 26.] · 제71회 경기도체육대회 2025 가평 [2025. 5. 15. ~ 5. 17.]
	3분기	· 체육시설 개보수공사 사업완료 1개소(자라섬 롤러경기장) - 2026년 경기도생활체육대축전 대회 대비

□ 향후계획

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 기대효과

❍ 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된

가평 이미지를 경기도 전역에 확산

❍ 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의

힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약

❍ 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현