약속Ⅲ	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화․관광도시로 성장하겠습니다.
가평 역사박물관 건립
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅲ-2	관광	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	경제산업국		문화체육과	문화예술팀장	-		담당자		-
추진현황	□완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 ■폐기						공정률		-

□ 변경내역 (공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.)

❍ 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장 유물 다양성 및 수량 부족 등 설립타당성 결과

부적정으로 부지 마련 절차, 기본계획변경 검토용역 필요에 따라 공약사업에서 제외

□ 추진방향

❍ 공립 박물관이 전무한 가평군에 군민의 역사에 대한 정체성을 확립

❍ 가평의 역사적 시대 흐름과 인물, 문화, 민속, 산업 등 다양한 분야를 조명하는 박물관 건립

❍ 가평의 역사인물을 알리고 교육 체험할 공간의 마련

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2028

❍ 사업위치: 가평읍 대곡리 산25번지 일원

❍ 사업규모: 부지면적 14,201㎡ / 건축 연면적 3,180㎡(지하 1층, 지상 1층)

❍ 소요예산: 17,969백만원   ※ 확보예산: 총 200백만원(23년: 200)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	17,969	62	10,339		838	1,934	4,729	2,838	7,568
국비	5,906		2,953				1,731	1,222	2,953
도비
군비	12,063	62	7,386		838	1,934	2,998	1,616	4,615
기타

❍ 사업내용

• 가평 역사박물관(가칭) 건립
• 박물관 내 역사인물 전용 전시실 설치 및 문화유적 체험을 위한 별도 공간 조성

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	-
2023	문체부 승인완료	․ 문화체육관광부 역사박물관 설립 타당성 사전평가 (2023. 7. 29 의뢰, 4~16개월 소요예상)	15	-
2024	사전검토용역	․ 1 ~ 8월: 건축기획용역, 사전검토, 공공건축위원회 심의, 투자심사 ․ 3 ~ 12월: 사업대상부지(군유지) 묘지이장(보상)	15	-
2025	실시설계	․ 1 ~ 12월: 설계공모 및 실시설계, 건설기술심사	20	-
2026	공사착공	․ 2 ~ 4월: 계약심사 ․ 5 ~ 12월: 공사착공	30	-
2027 ~2028	공사준공 및 개관	․ 27. 1월 ~ 28. 3월 : 공사추진 및 준공 ․ 28. 6월 : 개관	20	-

□ 추진실적

❍ 2022. 8. 9.: 추진계획 방침결재 완료

❍ 2022.12.14.: 가평역사박물관 건립추진위원회 위원 재위촉 및 신규 위촉

❍ 2022.12.23.: 가평역사박물관 건립추진위원회 전문가 자문

- 유물 수집 방향 및 범위, 유물 기증자 예우 방안 등

❍ 2023. 2. 7.: 2023년 유물수집계획 방침결재 완료

❍ 2023. 2.13.: 가평역사박물관 건립 유물구입 공고

❍ 2023. 4.11.: 행정사항 이행을 위한 공약사업 기간변경 완료

❍ 2023. 5. 4.: 가평역사박물관 건립 유물구입 완료(17건 277점)

❍ 2023. 7.21.: 문화체육관광부 사전 설립협의 완료

❍ 2023.10.27.: 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가(부적정)

❍ 2023.12.26.: 2차 유물구입 완료(12건 31점)

❍ 2024. 1.12.: 공약사업 제외 군수 방침결재 및 장기과제 전환

❍ 2024. 3.22.: 민선8기 공약사업 폐기

※ 민선8기 공약이행평가단 공약사업 실천계획 등 변경심의결과 알림

기획예산담당관-6178(2024. 3. 22)호

□ 추진상 문제점

❍ 가평군 박물관 건립추진위원회: 접근성 부족 우려 (2021년 전문가 자문)

❍ 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가결과 부적정 (2023.10.27.)

※ 전문적 별도 조직계획 미흡, 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장유물의 다양성 및 수량 부족

❍ 가평군 시설직 부서장 현장실사 결과 부지 변경 검토의견

※ 테니스장 지붕과 뒤편 임야로 인해 공간조망 부실, 주변시설과의 관련성 부족,

부지 경사도 개선 및 진입공간 확보를 위한 토목 ․ 건축공사로 예산 과다 투입 예상

□ 대책

❍ 현 위치 건립에 대한 부적정 의견이 다수임에 따라 대체 부지 마련절차 및

기본계획 변경 이행을 위한 검토용역 필요에 따라 공약사업 제외

(2024. 1.12. 군수 방침결재, 장기과제 전환 지시)

❍ 구입 및 기증 등 수집 된 유물의 공개를 통해 박물관건립 필요성을 군민에게 알리고

유물의 효율적 홍보를 위해 가평문화원 내 향토사료관(2층) 운영

【향토사료관 운영】

❍ 운영시기: 2025. 1월 ~ 박물관 개관 전까지

❍ 장    소: 가평문화원 향토사료실(2층)

❍ 운영주체: 가평군 직영

❍ 인    원: 학예사1, 기간제근로자2

❍ 공간구성: 유물전시실, 수장고 등

❍ 운영내용: 소장유물 기획전시, 상설교육, 유물 수집 등

❍ 소장유물의 다양성 확보를 위한 지속적 구입, 복제, 기증 등 필요

□ 기대효과

❍ 출토유물과 문화유산의 전시(기획전 포함) 및 이를 활용한 다양한 교육, 체험 행사의

진행으로 군민의 문화적․교육적 욕구충족 및 문화발전 기여