약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.
지방도387호선(내방-연하)도로 개량사업 조기 착공
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-2	건설	주민안전은 더 세심하게		경기도	계속		중기		임기 내
추진부서	건설도시국		건설과	도로시설팀장	김양섭(2425)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		45%

□ 추진방향

❍ 지방도 387호선은 도로 폭이 협소하고 평면 및 종단선형이 불량하여 사고위험이 상존함에 따라 교통사고 위험을 예방하고 도로 이용자의 통행 편의를 증진하며 나아가 수도권 제2순환고속도로와 연계 구축을 통한 지역 접근성 향상을 위해 도로 개량(터널화)이 필요한 실정임.

❍ 「제3차 경기도 도로건설계획」에 반영되어 추진 중인「지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업」에 대해서 관련 부처인 경기도와 적극적인 업무 협의를 통해 가평군 건의 사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성을 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2018 ~ 2034  ※ (공약실천계획서: 2018　~ 2028) 사업 전체 완료시점 기준

❍ 사업위치: 가평군 상면 상동리 ~ 남양주시 수동면 내방리

❍ 사업규모: 연장(L)=2.6km, 폭원(B)=10.0m (터널 1개소/0.9km)

❍ 소요예산: 48,100백만원 (도비 100%)

❍ 사업내용: 지방도387호선 선형 개량(터널 개설)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	‧ 기본설계용역 및 실시설계용역 착수	10	10
2023	기본설계용역 및 실시설계용역 추진	‧ 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	20
2024	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	‧ 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	15*
2025	편입용지보상 추진	‧ 편입용지보상 추진	20
2026 상반기	편입용지보상 완료 공사 착공 및 추진	‧ 편입용지보상 완료 ‧ 공사 착공 및 추진	30

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 기본 및 실시설계용역 착수(경기도), 착수보고회 개최(경기도)
2023	1분기	· 1차 주민설명회 개최(상면사무소)
2024	2분기	· 「경기 동부 SOC 대개발」 시·군 간담회 시 건의 · 주민설명회 개최(상동리 마을회관) · 국회 방문 건의
	3분기	· 경기도 방문 업무 협의(2회) · 3차 주민설명회 개최(상면사무소)
	4분기	· 경기도의회 정책 정담회 시 건의

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 당초 상동리 4반 마을 주민들이 종점부 기본설계 노선(안)에 대하여 민원을 제기하였으나 경기도에서 재검토한 노선(안)을 주민설명회(3차) 시 제시한 결과, 주민들이 적극 찬성함.

❍ 또한 부족 설계용역비에 대해서는 관계부서에서 ‘25년 본예산’에 신청하였으나 행정절차(예비타당성조사, 중앙투자심사 등) 지연에 따라 본예산에 미반영됨.

❍ 다만, 실시설계용역이 원활히 진행하고 있어 공정상 큰 문제는 없을 것으로 판단됨에 따라 상기 부족예산이 ‘25년 제1회 추경예산’에 반영될 수 있도록 국회, 경기도의회 등에 지속적으로 건의 노력하겠음.

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	4분기	· 기본 및 실시설계용역 준공(예정)
2026	4분기	· 용지보상 협의 추진(예정)
2034		· 공사 착공 및 준공(예정)

□ 향후계획

□ 기대효과

❍ 수도권제2순환고속도로와 유기적이고 효율적인 간선도로망을 구축하여 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화에 기여

❍ 평면 및 종단선형이 불량한 위험도로 개량으로 도로이용자 안전사고 예방

❍ 교통량 분산을 통한 국도46호선의 만성적인 교통 지․정제를 해소하여 내방객 및 지역주민들에게 교통편의 제공

□ 위치도 및 노선도