약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.
읍면별 도심지 주차장 확충 추진
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-7	교통	주민안전은 더 세심하게		가평군	계속		중기		임기 내
추진부서	건설도시국		교통과	교통시설팀장	김태랑(2259)		담당자		은지혜(2281)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		70%

□ 추진방향

❍ 읍면 도심지 내 부족한 주차 공간 확보를 통하여 원활한 교통 소통과 주민불편 해소

❍ 주민의견과 이용객의 접근성을 고려한 주차장 입지 선정 후 절차 진행

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026

❍ 사업위치: 관내

❍ 사업규모: 읍면별 도심지 주차장 조성

❍ 소요예산: 22,101백만원 ※ 가평읍 레일바이크, 조종면 시가지 사업구역 변동에 따른 706백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	22,101	1,675	20,411	5,471	5,849	3,204	5,887
국비
도비	8,649	1,500	7,149	2,500	3,649	1,000
군비	13,452	175	13,277	2,971	2,200	2,219	5,887
기타

❍ 사업내용 ※ 총사업비(보상비 / 공사비)

구 분	사업명	사업기간	사업위치	총사업비(백만원)	사업규모
계			5개소	22,101 (15,088 / 6,998)	부지면적 : 19,306㎡ 주차면수 : 462대
가평읍	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성	2022~24	가평읍 대곡리 243-14 일원	2,910 (2,215 / 695)	부지면적 : 2,852㎡ 주차면수 : 43대
	경춘선 폐선부지 (레일바이크) 옆 공영주차장 조성	2023~25	가평읍 읍내리 354-5 일원	4,591 (2,950 / 1,641)	부지면적 : 3,709㎡ 주차면수 : 107대
청평면	청평 공영주차장 (1구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 455-13 일원	5,345 (3,791 / 1,554)	부지면적 : 2,980㎡ 주차면수 : 60대
	청평 공영주차장 (2구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 79-133 일원	4,255 (2,632 / 1,623)	부지면적 : 6,586㎡ 주차면수 : 165대(대형 11)
조종면	조종면 시가지 공영주차장 조성	2022~25	조종면 현리 274-10 일원	5,000 (3,500 / 1,500)	부지면적 : 3,179㎡ 주차면수 : 87대

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	70
2022 하반기	청평 공영주차장(2구역) 실시설계	‧ 2022.12. : 실시설계용역 착수	10	10
	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 실시설계	‧ 2022. 9. : 부지 매입 완료 ‧ 2022.12. : 실시설계용역 착수
2023	청평 공영주차장(1구역) 착공	‧ 2023. 6. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 ‧ 2023. 7. : 국유지(2필지) 토지보상 ‧ 2023. 8. : 공사 착공	40	40
	청평 공영주차장(2구역) 착공	‧ 2023. 5. : 국유재산 매입 협의 ‧ 2023. 7. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 ‧ 2023. 8. : 공사 착공 ‧ 2023.12. : 공사 준공(토목)
	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 착공	‧ 2023. 5. : 실시설계용역 완료 ‧ 2023. 6. : 공사 착공
	레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	‧ 2023.12. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수
	조종면 시가지 공영주차장 실시설계	‧ 2023. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수
2024	· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19. - 내용: 구역별 사업기간, 사업규모, 소요예산 - 사유: 행정절차 이행 기간 및 사업 규모 변경		30	20*
	청평 공영주차장(1구역) 준공	‧ 2024. 4. : 공사 준공
	청평 공영주차장(2구역) 준공	‧ 2024. 4. : 공사 준공 ‧ 2024. 5. : 국유재산 매입 완료
	레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	‧ 2024. 7. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 ‧ 2024.10. : 손실보상 ‧ 2024.12. : 문화재조사
	조종면 시가지 공영주차장 준공	‧ 2024. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 ‧ 2024. 7. : 손실보상 ‧ 2024. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
2025	레일바이크 옆 공영주차장 준공	‧ 2025. 3. ~ 7. : 공사 착공 및 준공	20

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적					비고
		가평읍		청평면		조종면
		어린이음악놀이터	레일바이크	1구역	2구역	시가지
2022	4분기	· 실시설계 용역 착수
2023	1분기	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 180백만원)			· 실시설계 용역 착수
	2분기	· 실시설계 용역 완료 · 공사 착공				· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수
	3분기			· 경기도 계약심사 완료 · 공사 착공
	4분기	· 조성공사 (통신)준공	· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수		· 공사(토목) 준공
2024	1분기	· 조성공사 (토목)준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)		· 공사(통신) 준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)
	2분기		· 군계획시설 (주차장) 결정 및 고시	· 공사(전기) 준공		· 주민설명회 개최
				· 공사(통신) 준공 · 공사(토목) 준공
	3분기					· 군계획시설 (주차장) 결정 입안
	4분기	· 조성공사 (전기)준공	· 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가 신청	· 군계획시설 (변경)인가 고시 · 연결계단 설치공사 준공

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 2025년 가평읍 레일바이크 사업비 4,500백만원 본예산 미반영으로 추진완료 시기 지연

❍ 국가철도공단 내부행정절차 진행에 따른 폐선부지 매수 지연

⇒ 매수 전 무상사용허가를 득해 공사 정상 추진(2024. 5. 매수 완료)

□ 향후계획

❍ 「주차장법」 제3조에 따른 주차장 수급 실태조사 결과와 읍·면 주차장 조성 건의 등

검토하여 그 외 도심지 주차장 추가 확충

□ 기대효과

❍ 공영주차장 조성으로 도심지 주차난 해소를 통한 주민불편해소

□ 사진

가평읍 어린이음악놀이터 옆	가평읍 레일바이크 인근
청평면 1구역(청평농협 뒤)	청평면 2구역(중앙내수면연구소 옆)
조종면 시가지(조종초교 앞)