약속Ⅵ	군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.
경기도의료원 가평병원 유치
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅵ-1	보건	주민안전은 더 세심하게		가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	보건소		보건정책과	보건행정팀장	윤정숙(2810)		담당자		조혜영(2811)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		25%

□ 추진방향

❍ 지리적 특성으로 의료불균형 해소에 한계가 있으며, 의료서비스 향상을 위하여

병원급 이상의 공공 의료기관 확보(응급의료분야 의료취약지: 가평, 동두천, 양평, 여주, 연천)

❍ 24시간 응급진료 및 공공진료가 가능토록 추진함으로서 지역 간 의료격차 해소

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6.  ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2026. 7.

❍ 사업위치: 가평군 청평면 일원 예정

❍ 사업규모: 건물신축 1동 (6,275.3㎡)

❍ 소요예산: 45,604백만원  ※ 공약실천계획서: 30,130백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	45,604		25,030	45			10,000	14,985	20,574
국비	10,627		5,881					5,881	4,746
도비	2,657		1,471					1,471	1,186
군비	32,320		17,678	45			10,000	7,633	14,642
기타

❍ 사업내용

시 설	세 부 내 용	비 고
진료시설	725.3㎡ (치과, 한방과, 일반내과, 일반외과, 산부인과, 소아과, 정형외과 등)
응급시설	245.7㎡ (응급실, 처치실, 당직의사실 등)
진료지원시설	378㎡ (방사선실, 임상병리실 등)
병동시설	941.4㎡ (1인실, 2인실, 4인실, 간호사실 등)
사무시설	975.7㎡ (회의실, 사무실, 원무과, 전산실 등)
보건사업활동시설	712.3㎡ (결핵관리실, 구강보건실, 건강증진실 등)
서비스시설	670㎡ (세탁실, 식당 등)
기타시설	1626.9㎡ (공유면적, 기계실, 선택시설 등)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	25
2022 하반기	기본계획 수립 및 부지선정	‧ 추진 방침 결정 및 기본계획 수립 ‧ 타당성조사 용역 실시 ‧ 부지 선정	10	10
2023	사전절차 이행	‧ 가평병원 설립 계획 확정(연구용역 완료) ‧ 사전 행정절차 이행 ‧ 설립, 운영 관련 조례 등 법령 제정·정비 ‧ 부지매입 협의	20	15*
2024	부지매입 및 설계완료	‧ 부지매입 ‧ 사업예산 확보: 국·도비 확보 ‧ 군 계획 결정 및 실시계획 인가 ‧ 기본 및 실시설계	20
2025	착공	‧ 시공업체 선정 및 계약 ‧ 공사착공	40
2026 상반기	진행	‧ 공사진행	10

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 기관 방문 건의(경기도 공공의료과/설립 필요성 제기)
	4분기	· 의료원 유치를 위한 민·관 추진위원회 위촉 및 민간(유관기관) 간담회 - 가평 의료원 유치 방향, 민간부분 공조, 군민 서명 운동 협조 · 기관 방문 건의(경기도 보건건강국/유치 건의)
2023	1분기	· 의료원 유치를 위한 범 군민 서명 운동 및 지역사회 홍보 · 경기도의료원 유치 범 군민 건의문 및 서명부(28,028명) 전달 - 경기도의료원 가평병원 설립 필요성(경기도지사 군수님 면담) · 민·관 추진위원회 벤치마킹 및 회의(청송군, 경기도의료원포천병원) · 의료원 유치 및 설립 추진방향 경기도 (보건)의료원 기관 방문
	2분기	· 의료원 타당성 조사 연구용역 추경 편성 및 용역 시행(한국능률협회컨설팅)
	3분기	· 기관 방문 협의(경기도 보건의료과 및 경기도의회 보건복지위원회) · 총괄 업무 사무인계인수[성과관리팀 ☞ 보건정책과] · 타·지자체 의료(병)원 건립 및 운영 현황 벤치마킹 - 연천군보건의료원(8. 10.), 정선군립병원(8. 11.), 삼척의료원(8. 22.) · 2023년 제4차 정기지방재정 「중앙」투자심사의뢰서 제출 · 기관 방문 협의(경기도 군협력담당관) - 의료원 건립부지(구, 국군청평병원)관련 국방부 등 유관기관 협조 요청 - 구)국군청평병원 부지 현장 확인 및 유관기관 협조 방안 논의 · 의료원 건립 부지 매입 및 지역 의료기관 상생 협의 - 건립 부지(구, 국군청평병원) 매입(환지) 협의(수도기계화보병사단 사단장) - 병원 건물·시설 2개층 활용, 상생 협업 요청(HJ매그놀리아국제병원장, 경영이사) · 강원대학교병원 방문 논의(운영 방안) - 가평군 응급의료 지원 방향 논의(강원대학교병원 기획조정실장, 기획예산과장) · 단양군 보건소 벤치마킹(2024년 보건의료원 개원 예정) · 건립 부지 매입을 위한 국방부 및 경기도 협조 요청 - 구)국군청평병원 매입 및 환지 요청(국방부), 상생협의체 안건 제출(경기도) · 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 실무 협의 - 구)국군청평병원 부지 매입(환지)관련 실무 협의(북부시설단 팀장)
2024	2분기	· 건립 부지 선정위원회 위촉장 수여 및 회의 개최 · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 재개 (중지일:‘23.7.12.) · 기관 방문 협의(국토부, 행안부/부지 매입 절차 업무 협의) · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 최종보고회 개최 · 舊)국군청평병원 부지 활용방안 국방부(경기북부시설단)와 논의 및 현장 확인 · 국방부 소유 건립 후보지 매입 절차 관련 부서(도시과, 안전재난과) 간담회
	3분기	· 제2회 건립부지 선정위원회 개최 - [최종: 舊)국군청평병원(청평리 259번지 일원)] · 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 실시
	4분기	· 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 부지 매입을 위한 사전 행정절차(공유재산 심의, 지방재정투자심사 등) 이행기간 소요

⇨ 의료기관 건립 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 완료후 건립 및 부지매입 추진

❍ 건립에 필요한 부지 매입비, 건립비 등 국,도비 예산 확보 어려움

⇨ 공모사업, 지방소멸대응기금 등 공공의료기관 건립에 필요한 재정 확보를 위하여 관계부처와 지속적 업무 협의

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 완료
	4분기	· 사전 행정절차 이행 등 부지 매입 병행

□ 기대효과

❍ 24시간 응급의료 체계 구축 및 미충족 의료서비스 제공으로 의료 불균형 해소하여 공공의료서비스 질 향상

❍ 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화