약속Ⅵ	군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.
상면 생활문화체육시설 및 공간조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅵ-4	체육	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		중기		임기 내
추진부서	경제산업국		문화체육과	문화체육시설팀장	장성세(2510)		담당자		이선명(2072)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		40%

□ 추진방향

❍ 다목적 생활문화공간 조성으로 양질의 문화 공간 제공을 통한 지역주민의 복지 증진 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2025. 12.

❍ 사업위치: 상면 연하리 136-3번지 일원

❍ 사업용도: 문화센터, 공연장, 체육시설(종합행정타운) 등

❍ 소요예산: 5,200백만원(보상비 2,200백만원, 시설비 3,000백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390
국비
도비
군비	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390
기타

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기	사업대상지 선정	‧ 시설의 필요성, 수혜도 등을 종합적으로 고려한 세부사업 계획 확정	5	5
2023	토지보상	‧ 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 12월	10	10
2024	실시설계	‧ 군관리계획 변경 및 실시설계 : 6월 ~ 12월	25	25
2025	실시설계 완료 및 공사착공	‧ 군관리계획 변경 및 실시설계 : 1월 ~ 3월 ‧ 편입토지 손실보상 협의 : 4월 ~ 8월 ‧ 공사 착공 : 8월	40
2026	공사준공	‧ 공사 준공 : 6월	20

※ 사업기간 연장에 따라 변경

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 주민의견 수렴 제출 요청(문화체육과→상면) 및 주민 회의 개최
2023	1분기	· 주민건의(상면청사신축)에 대한 의견제출 요청(문화체육과→회계과) ※ 면청사 이전 – 별도 검토 추진(회계과) · 편입토지(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료 · 부서의견 회신(회계과→문화체육과)
	3분기	· 편입 물건(상면 연하리 136-5번지, 분묘3기)손실보상협의 요청
2024	2분기	· 편입토지 물건(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료
	3분기	· 군관리계획 결정, 실시설계 용역 의뢰 및 착수

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 군·관리계획 결정을 통해 문화센터, 공연장 및 운동시설 설치 등에 대한 위치를 결정한 후 토지보상 및 시설별 세부계획 확정 추진

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 실시설계(안)에 대한 주민설명회 개최 · 군관리계획 결정 및 실시설계용역
	2분기	· 편입토지 손실보상 협의(~25.8월)
	3분기	· 공사 착공
2026	2분기	· 공사 준공

□ 기대효과

❍ 다목적 생활문화공간을 조성하여 양질의 문화공간을 제공하여 군민의 복지증진 및 삶의 질 향상