약속Ⅵ	군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.
설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅵ-5	체육	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		중기		임기 내
추진부서	경제산업국		문화체육과	문화체육시설팀장	장성세(2510)		담당자		이선명(2072)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		70%

□ 추진방향

❍ 체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등

건전한 여가활동 제공

❍ 체육시설 이용객의 편의를 위한 주차장 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.

❍ 사업위치: 설악면 선촌리 산34-5번지 일원(설악생활체육공원)

❍ 사업규모: 체육센터 2개소, 주차장 조성 1식

❍ 소요예산: 17,550백만원 ※ (공약실천계획서: 17,100백만원) 반다비 체육관 관람석 설치(446석)로 250백만원 등 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	17,550	12,600	4,950	1,000	2,000	1,450	500
국비	6,000	4,000	2,000	1,000	1,000
도비
군비	11,550	8,600	2,950		1,000	1,450	500
기타

❍ 사업내용

시설구분	위치	규모	소요사업비(백만원)	비고
계	3개소		17,550
설악 반다비 체육센터	설악면 선촌리 31-4번지 일원	연면적:2,531㎡ (지상3층/1동)	13,050
설악면 생활형 국민체육센터	설악면 선촌리 32-1번지 일원	연면적:1,268㎡ (지상2층/1동)	2,600
설악 생활체육공원 주차장 확충사업	설악면 신천리 514-1번지 일원	주차장 조성 4,193㎡	1,900

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	70
2022 하반기	실시설계 및 공사추진	‧ 설악 반다비 문화체육센터 착공 ‧ 설악 생활형 체육센터 준공	20	20
2023	실시설계 및 공사추진	‧ 설악생활체육공원 주차장 확충사업 실시설계 및 군관리 계획(변경)결정 용역	20	20
2024	공사추진	‧ 설악 반다비 문화체육센터 준공 ‧ (주차장)편입 토지 손실보상 협의	30	30
2025	사업완료	‧ (주차장)편입 토지 손실보상 협의(1~3월) ‧ 설악생활체육공원 주차장 확충사업 착공(4월) ‧ 설악생활체육공원 주차장 확충사업 준공(12월) ※ 당초: 착공 24.9월 / 준공 25.6월	30

※ 설악 생활체육공원 주차장 확충사업 착공 시기 연장에 따른 목표이행률 일부 수정

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적		비 고
		설악 반다비 문화체육센터	설악생활체육공원 주차장 확충사업
2022	3분기	· 공사 착공 · 주민설명회 개최(1·2차)	· 사업대상지 현장 확인 및 검토
	4분기	· 소통 회의 개최(민원해소 대책방안)	· 대상지 수정 건의 관련 설악면 7개 기관단체장 회의 ※ 신천리 514-1번지 일원으로 변경
		설악면 생활형 국민체육센터 준공 [2022.11.24.]
2023	1분기	· 주민설명회 개최(3차) · 진입로 개선공사 실시설계용역 착수 · 주민설명회 개최(4차/진입로 관련) · 공사 재착공	· 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수
	3분기	· 콘크리트파일(말뚝) 시공 완료	· 주민설명회 개최
	4분기	· 동절기 공사 중지	· 군관리계획 결정(변경) 협의 등 행정절차 이행
2024	1분기	· 공사 재착공
	2분기		· 군관리계획 결정(변경) 고시 완료
	3분기		· 실시계획인가 실무부서 협의 등 행정절차 이행 · 매장문화유존지역 지표조사 실시 · 토지보상금 예산 확보(1,200백만원) · 대상지 보상계획 공고
	4분기	· 공사 준공	· 편입토지 감정평가 의뢰 및 회보 · 편입토지 손실보상 요청

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 설악체육공원 주차장 확충 편입토지에 대하여 토지주에게 손실보상요청을 하였으나, 토지주들이 감정평가에 대한 이의를 제기하고 변호사를 선임함에 따라 토지 수용이 장기간 소요될 것으로 보임.

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획		비 고
		설악 반다비 문화체육센터	설악생활체육공원 주차장 확충사업
2025	1분기	· 에너지효율등급 및 제로에너지 인증 완료 · 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 완료	· 편입토지 손실보상 협의 추진
	2분기		· 공사 착공
	3분기		· 공사 준공

□ 기대효과

❍ 체육시설을 확충하여 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공 및

생활체육 활성화 도모

❍ 주차장을 확충하여 불법주차 감소를 통한 차량사고 위험을 감소하고 체육공원 이용객의 편의 증진