약속Ⅱ	맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.
노인회관(노인복지회관) 건립
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅱ-2	복지	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	행정안전국		사회복지과	복지시설팀장	장성세(2228)		담당자		조영윤(2253)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		60%

□ 추진방향

❍ 가평군노인회, 노인회 취업센터, 가평군노인복지관이 각각의 시설에서 운영되고 있어 복지

서비스 이용 시 수혜자 및 프로그램 중복을 줄이고 보다 많은 어르신들에게 다양한

프로그램 제공을 위해 관련 시설들을 한곳에서 운영

❍ 또한, 접근성이 편리하고 어르신들이 이용하기 편리한 위치에 조성하여 노인여가복지 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023 ~ 2026

❍ 사업위치: 가평읍 읍내리 282-2

❍ 사업규모: 연면적 약 2,450㎡(지하1층, 지상4층)

❍ 소요예산: 12,100백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	12,100		12,100		2,142	450	9,508
국비
도비
군비	9,300		9,300		2,142	450	6,708
기타	2,800		2,800				2,800			특조금

※ 부지매입비 2,100백만원 / 공사비 10,000백만원

※ 재원확보방안: 특별조정교부금(2,000백만원) 및 지방소멸대응기금(2,000백만원)지원건의

▸ 국·도비 미확보 시, 군비 확보 필요

❍ 사업내용

• 지하1층: 기계실, 전기실, 창고 등
• 지상1층: 경로식당, 소강당, 창고, 물리치료실, 상담센터실 등

• 지상2층: 노인복지관 사무실, 프로그램실, 창고 등

• 지상3층: 지회장실, 노인대학장실, 노인회 사무실, 취업센터 사무실 등

• 지상4층: 대강당, 프로그램실, 창고 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	60
2022 하반기	부지선정	· 가평군노인회 및 가평군노인복지관 등 의견수렴	10	10
2023	부지매입	· 노인회관 신축 지자체 벤치마킹 실시(양평, 포천) · 공유재산 관리계획 승인 · 재정투자 심사 · 중기지방재정계획 반영	20	20
2024	실시설계	· 특별조정교부금 및 특별교부세 등 신청 · 공공건축물 사업계획 사전검토 · 실시설계 착수	30	30
2025 ~2026 상반기	공사추진	· 실시설계 완료 · 공사 착공 및 공사 진행	40	-
2026 하반기~	공사추진	· 공사 준공	-	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	4분기	· 중기지방재정계획 반영 · 부지선정 후 부지의 감정평가 실시
2023	1분기	· 제1회 가평군 공유재산 심의회 원안가결 · 제1회 지방보조금 투자심사 원안가결
	2분기	· 노인회관 부지 매입 완료(2,100백만원) · 제2회 지방보조금 투자재심사 원안가결
	3분기	· 제4회 가평군 공유재산 심의회 원안가결
	4분기	· 노인회관 건립공사 건축기획용역 착수
2024	1분기	· 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
	2분기	· 공공건축 사업계획 사전검토 완료 · 공공건축심의위원회 심의 완료 · 건축기획용역 완료 · 건축설계공모 공고
	3분기	· 공모 작품심사위원회 개최 · 설계용역 계약 의뢰
	4분기	· 설계용역 계약 체결 · 설계용역 착수보고회 실시 · 설계용역 사용자 설명회 실시
2025	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획 등 - 사유: 건축기획용역, 사업부지 감정평가 결과에 따른 추진계획 변경 · 설계(안) 사용자 설명회 실시 · 국가유산사전영향진단 실시
	2분기	· 매장유산 정밀발굴조사용역 착수

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	3분기	· 매장유산 정밀발굴조사용역 완료(25.9월) · 기본 및 실시설계 용역 완료(25.10월) · 공사 착공(25.11월)
	4분기	· 공사 준공
2026	-

□ 기대효과

❍ 노인여가복지시설 이용자들이 고령임을 감안, 이용자의 안전과 이동의 편리함을

최우선으로 하여 이용자의 만족도 향상

❍ 교육, 각종 여가활동, 노인일자리 등 다양한 복지서비스 제공시 프로그램 중복을 방지하고 수요자의 눈높이에 맞게 제공함으로써 삶의 질 향상

□ 조감도