약속Ⅱ	맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.
평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영
관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅱ-5	교육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속		중기		임기 내
추진부서	평생교육사업소		평생학습팀장	정선영(4676)		담당자		박경원(2476) 김범수(4678)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률		58%

□ 추진방향

❍ 성인 취미․교양 교육을 넘어서 지역성장에 기여하는 지속가능발전 목표의 지표에 부합한

범분야별․생애별 특성화 교육기관으로서 지역 인적자원 육성 및 강화 역할 수행

❍ 강의 공간․체험실습 공간․편의시설 공간 등을 갖춘 종합시설로서 계획 및 추진

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020 ~ 2026

❍ 사업위치: 가평읍 읍내리 885번지 일원

❍ 총사업비: 23,000백만원

• 공사비 17,073백만원, 감리비 2,017백만원, 보상비 2,400백만원, 용역비 등 1,510백만원

• 별도편성: 교육프로그램 운영 관련 연간 사업비(1,260백만원*), 착공식 행사운영비

*가평군 인재육성재단 설립 타당성 연구(2022, 경기연구원) 기준

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	23,000	3,700	19,300		5,477	13,823
국비
도비	17,875	1,500	16,375		4,069	12,306
군비	3,005	2,200	805		688	117
기타	2,120		2,120		720	1,400

❍ 사업내용: 부지면적 7,450㎡, 연면적 4,657.02㎡, 지하1층~지상4층

❍ 도입시설 건축(안)    ※ 문화공연 시설은 인근 유사시설 활용으로 제외

층 별	주 요 시 설
지상4층	바리스타체험실, 카페공간, 조리제빵실, 생활스포츠실
지상3층	교육생태지원실, 강의실, IT실, 영상편집실, 크리에이티브실, 준비실, 음악실, 음악감상실, 음악창작교육실, 양재실
지상2층	강의실(3), 스터디실, 대기실, 동아리실(3), 커뮤니티실, 뷰티건강실습실, 준비실(2), VR/AR체험실, 체험존(2)
지상1층	로비, 반려동물실습실, 숙직실
지하1층	사무실(2), 회의실, 상담실(2), 휴게실, 창고, 아이돌봄실, 수유실, 휴게음식점, 소매점, 기계실, 전기실, 발전기실

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	58
~2022 상반기	토지매입 및 실시설계⦁ 평생학습관 운영계획 수립	․ 경기도 지방투자심사 및 공유재산관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영 ․ 실시계획인가 및 수용재결(읍내리 885외 5필지 매입) ․ 평생학습관 운영계획 수립 용역 발주(’22. 5.)	30	30
2022 하반기	투자심사 재검토 및 평생학습관 운영계획 수립용역 완료	․ 사업비 증액에 따른 중앙투자심사 재심사 요청(’22.3.) ․ 중앙투자심사 재검토 통보(’22.6.)에 따라 재검토 내용 연구용역 반영 및 재분석실시 (’22. 7. 사업규모 및 운영수지 재분석) ․ 평생학습관 운영계획 수립 용역완료(’22.12.) ․ 중앙투자심사 재검토 사항의 분석에 따른 사업 규모축소로 재심사 미대상으로 확인(30% 미만), 중앙투자 심사 재심사 절차 제외(’22.12.) ․ 민선8기 공약사업 계획 변경(’22.12.군수방침결재)	5	5
2023 상반기	실시설계 변경추진 및 관련 협의	․ 설계 변경에 따른 변경계약 체결(’23.4.) ․ 실시설계 변경 추진(’23. 1. ~ 6.) 및 경기도 지역균형 발전위원회 기본계획 변경, 친환경청정사업 계획 변경 ․ 설계의 경제성 등 검토, 예비인증(녹색건축, 에너지효율) 등 재협의(’23. 6.)	10	10
2023 하반기	건설기술심의 등 행정절차완료 및 공사발주	․ 경기도 건설기술심의 완료(’23. 7. ~ 8.) ․ 조달청 원가 심사(’23. 9. ~10.) ․ 공사 계약 및 발주(’23.11.)	5	5
2023 하반기 ~2025 하반기	공사진행 및 공사준공, 교육 프로그램 운영 준비	․ 공사 진행(’23.11. ~ ’25.10.→’24. 3. ~ ’26. 9.) ․ 공사 준공(’25.11.→’26. 9.예정) ․ 교육 프로그램 운영(안) 확정 (’26. 6.) ․ 수강생, 강사 모집(’26. 6. ~ 9.)	50	8
2026 2.~	평생학습관 개관 및 운영	․ 평생학습관 개관(’26. 2.→’26. 10.) ․ 상‧하반기 정기 교육프로그램 운영(’26. 10.~ )	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	1분기	· 실시설계 결과 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰 (당초 총사업비 180억원 ⇒ 300억원)
	2분기	· 중앙투자심사 재심사 결과 “재검토” 통보(사업규모 및 운영수지 재분석)
	4분기	· 중앙투자심사 재검토사항 「평생학습관 운영계획 수립 용역」 반영 - 사업규모 축소 운영 제시 (연면적 6,849.03㎡ ⇒ 4,632.19㎡) · 『가평군 평생학습관 건립사업』 변경 추진계획 수립(사업규모 축소 반영)
2023	2분기	· 가평군 평생학습관 건립사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약 체결 · 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 용역 발주
	3분기	· 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 완료 · 녹색건축물 관련 예비인증 재인증 완료 · 경기도 건설기술심의 신청
	4분기	· 경기도 건설기술심의 완료 · 2024년도 한강유역환경청 친환경청정사업 선정 2,177백만원 예산 확보 · 조달청 공사계약 의뢰 완료 · 건축협의(허가) 완료, 전기·통신·소방공사 개찰 완료
2024	1분기	· 공사계약 완료 및 착공 · 공사 중지(건설사업관리 및 전기감리용역 계약 지연) · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19. - 내용: 소요예산(30,000→23,010백만원), 사업규모(연면적 6,849.02㎡→4,657.02㎡) - 사유: 중앙투융자심사 재검토의견을 반영해 사업 규모 축소
	2분기	· 공사 재착공
	3분기	· 가설공사, 토공사
	4분기	· 가설공사, 토공사
2025	1분기	· 토공사
	2분기	· 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 58%, 공사기준 공정률 15%)

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	3분기	· 철근콘크리트공사 진행(계속)
	4분기	· 철근콘크리트공사 완료
2026	1분기	· 마감공사 진행
	2분기	· 토목/조경공사 진행 · 교육 프로그램 운영(안) 확정(~‘26. 6월)
	3분기	· 수강생 및 강사 모집(~‘26. 9월) · 공사 준공(‘26. 9월)
	4분기	· 평생학습관 개관(‘26. 10월~) · 하반기 정기 교육프로그램 운영(‘26. 10월~)

□ 기대효과

❍ 사회변화에 대응하는 전 군민의 역량, 행복지수, 의식수준 향상을 통하여 가평군 전체의 생동감과 지역경쟁력 극대화와 군립대학역할 수행

□ 위치도 및 조감도