약속Ⅲ	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화․관광도시로 성장하겠습니다.
미영연방 관광안보공원 조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅲ-1	관광	자연환경은 더 아름답게		가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	행정복지국		복지정책과	복지기획팀장	신성남(2210)		담당자		김은영(2214)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		40%

□ 추진방향

❍ 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에

동 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성

❍ 군유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 8. ~ 2028. 12.  ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2026. 6

❍ 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원

❍ 사업규모: 부지면적 151,151㎡ (93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등

❍ 소요예산: 29,600백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	29,600		18,665		50	300	5,300	13,015	10,935
국비
도비	11,815		11,815				1,800	10,015		균특
군비	14,385		3,450		50	300	100	3,000	10,935
기타	3,400		3,400				3,400

❍ 사업내용  ※ 트리워크 등 제외

• 가평전투기념관 1,600㎡ 건립

• 메모리얼파크 및 미‧영연방 정원 조성 6,770㎡

• 주차장 조성 6,275㎡

• 트리워크 및 산림 휴양시설 조성 9,480㎡

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기	중기지방재정계획 및 주민의견수렴	‧ 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영 ‧ 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴	10	10
2023 ~ 2024	사전타당성 연구용역 및 예산확보	‧ 자료조사 및 우수시설 벤치마킹 ‧ 사업 타당성 용역실시(사업비 산정) ‧ 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정 ‧ 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 공유재산관리 계획) 및 사업예산 확보 ‧ 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계	30	30
2025	행정절차 이행 완료 및 공사 계약	‧ 실시설계 완료 ‧ 실시설계 공모 ‧ 행정절차 완료(투융자심사, 인허가 및 계약 심사 등)	30
2026	공사 착공	‧ 공사 착공	30
2027 ~ 2028	공사 추진 및 준공	‧ 공사 추진 및 준공	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고 · 미영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고 · 중기지방재정계획 반영
	4분기	· 주민의견 수렴(2회)
2023	1분기	· 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소) · 학술연구용역 심의 의결(원안가결)
	2분기	· 사전 타당성 조사 연구 용역비 확보(70백만원) · 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수
	3분기	· 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관련 - 착수보고회, 주민설명회(1·2차), 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최
	4분기	· 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회·최종보고회 개최, 용역 준공 · 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)
2024	1분기	· 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결 · 지방재정 투자심사 조건부 의결 (2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영) · 미‧영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰
	2분기	· 미‧영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수
	4분기	· 미‧영연방 관광안보공원 군관리계획(공원) 입안 서류 접수(가평군 도시과) · 미‧영연방 관광안보공원 공공건설 사전검토 완료 · 제3차 지역균형발전사업비 확보(11,815백만원) · 2024년 제23회 가평군 군계획(분과)위원회 안건 상정 *조건부 자문 · 공공건축심의위원회 심의 완료 · 가평 군관리계획[군계획시설(공간시설 근린공원)] 결정 신청 - 경기도 도시주택실 도시정책과 제출 · 미‧영연방 관광안보공원 조성 추진 계획 변경 보고 당초 : 루지 조성 → 변경 : 트리워크
2025	1분기	· 미‧영연방 관광안보공원 조성 건축 및 조경 설계공모 공고 (가평전투기념관 및 공원) · 지방재정중앙투자심사 접수 및 사전검토 이행 · 미‧영연방 관광안보공원 조성사업 건축 및 조경 설계공모 당선작 발표 · 재해 및 환경 경기도 계약심사 완료
	2분기	· 지방재정중앙투자심사 재상정 · 미‧영연방 관광안보공원 군관리계획(결정) 승인 – 경기도 도시정책과 · 미‧영연방 관광안보공원 공원조성계획(결정) 입안 신청서 제출 – 가평군 도시과 · 문화재 영향진단 신청서 제출 - 국가유산청

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 국·도비 등 예산 확보 노력 강구

□ 향후계획

❍ 추가 국·도비 예산 확보를 위한 노력 강구

❍ 행정절차 이행완료(건축실시설계, 계약심사 등)

❍ 공원 명칭공모

□ 기대효과

❍ 미영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해      지역경제 활성화에 기여

□ 조감도