약속Ⅲ	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화․관광도시로 성장하겠습니다.
북한강 천년뱃길 조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅲ-11	관광	차별화된 문화․관광, 새로운 성장		가평군	계속		장기		임기 외
추진부서	경제산업국		관광과	수상관광팀장	김종호(2175)		담당자		임재희(2664)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		40%

□ 추진방향

❍ 경춘선 복선전철 및 서울-춘천고속도로 개통 등 우리 군의 교통여건은 점차 개선 중이나 방문하는 관광객은 크게 증가하지 않아 새로운 테마관광사업 개발이 필요하며

❍ 우리 군의 주요 관광지는 산재 되어 있어 접근성 및 연계가 미흡한 바 북한강을 이용한 수상관광루트를 개발하여 북한강 권역의 주요관광자원(자라섬, 남이섬, 쁘띠프랑스, 물미연꽃마을 등)을 연계하는 북한강 천년뱃길 조성사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020. ~ 2027.

❍ 사업위치: 가평군 북한강(청평호) 일원

❍ 소요예산: 52,400백만원(군비 15,000백만원, 민간 37,400백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	52,400		52,400	15,625	21,546	12,200	3,029
국비
도비
군비	8,600		8,600	625	6,546		1,429
기금	6,400		6,400			4,800	1,600
민간	37,400		37,400	15,000	15,000	7,400

❍ 사업내용

• 뱃길 40km 및 육상 순환루트 조성, 북한강 수변 주요 관광지를 연결하여 시너지 효과를

극대화 하고 신규 관광자원 발굴 및 확대

• 수변생태관광 활성화를 위한 다목적 선착장 6개소 조성

• 친환경 선박 건조 및 운항(전기추진선 등 선박 3척 건조)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기 ~2023	사업비 확보 및 착공	‧ 자라나루 선착장 조성사업 착공	15	15
2024	1단계 운항 실시	‧ 자라나루 선착장 조성사업 준공 ‧ 북한강 천년뱃길 1단계 운항 실시	25	25
2025	공공선착장 조성 추진	‧ 호명나루 선착장 조성사업 착공 ‧ 자라나루 기반시설 조성사업 추진	30
2026 상반기	공공선착장 조성 추진	‧ 호명나루 선착장 조성사업 준공	30
2026 하반기~	사업 개시	‧ 물미연꽃나루 선착장 조성사업 착공 및 준공 ‧ 북한강 천년뱃길 2단계 운항 실시	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 경기도 해양수산과 방문협의 및 가평군 의회 사업장 방문
	4분기	· 친환경 전기선박 진수식 · 시범운항 실시 (2회, 162명 탑승)
2023	2분기	· 운영방안 수립 연구용역 착수 · 자라꽃섬나루 다목적 선착장 착수
	4분기	· 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023.11.16. - 내용: 다목적 선착장 7→6개소(공공선착장 4→3, 민간선착장 3) - 사유: 복장포구 인근 수상레저종합센터 건설사업을 위한 학술연구용역 추진중으로 효율적인 사업 추진(중복투자방지)
2024	2분기	· 자라꽃섬나루 인양 협의(㈜ 남이섬) · 북한강 천년뱃길 가평크루즈 출항식 · 자라나루 선착장 완공 · 1단계 운항(자라섬~남이섬~송산리)
2025	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 - 사유: 민간 투입 예정인 친환경 선박의 건조 일정이 지연되어 변경 · 자라나루 기반시설 조성사업 하천점용허가 협의 추진
	2분기	· 호명나루 경관광장 손실보상 협의 · 군관리계획[군계획시설(공간시설광장)]결정(변경) 및 실시계획인가

□ 향후계획

❍ 2027. 12.: 북한강 천년뱃길 전 구간 운항 실시

□ 기대효과

❍ 친환경 선박 도입을 통한 청정한 북한강 이미지 조성

❍ 행락철 가평으로 진입하는 주요도로의 정체에 구애받지 않고 북한강 물길을 이용한 자유로운 이동 및 관광지 연계를 통한 관광객의 만족도 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 참고사진