약속Ⅲ	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화․관광도시로 성장하겠습니다.
북면 산림생태테마파크 조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅲ-9	산림	자연환경은 더 아름답게		가평군	계속		중기		임기 내
추진부서	경제산업국		산림과	산림휴양팀장	정선기(2480)		담당자		최영재(2486)
추진현황	■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		100%

□ 추진방향

❍ 북면 계관산을 우수한 자연생태자원 등과 연계・강화하고 접근이 용이한 숲길 조성

❍ 특색 있고 차별화된 숲길 조성을 통한 볼거리 제공 및 지역경제활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023. 1. ~ 2025. 12.

❍ 사업위치: 가평군 북면 목동리 산207(임)번지 일원

❍ 사업규모: 숲길 조성 및 정비(L= 5km)

❍ 소요예산: 262백만원 ※ 보수 물량 증가에 따른 사업비 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	262		262			16	246
국비
도비
군비	262		262			16	246
기타

❍ 사업내용

• 북면 생활권 등산로 정비(데크, 전망대 보수)

• 편의 시설물 설치(쉼터 설치, 안전로프, 안내판 설치)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	100
2024	실시설계용역	‧ 실시설계용역 추진	10	10
2025	산림생태테마파크 조성	‧ 공사 추진 및 준공	90	90

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 공약사업 추진 관련 사전 답사
2023	3분기	· 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수 보고회, 주민 설명회 참석(복지정책과 추진)
2024	4분기	· 공약사항 추진계획 변경 보고 · 공약이행 평가단 현장 실사 · 공약이행평가단 제6차 회의 / 2024. 11. 12. - 내용: 사업기간(~2023. 12. → 2025. 12.), 사업위치, 사업내용, 소요예산 - 사유: 미영연방 관광안보공원 조성사업과 연계 추진하고자 했으나 유사사업이 포함됨에 따라 기존 북면 주민이 이용하는 생활권 등산로 정비 · 조성사업 실시설계용역 착수 [2024. 11. 14.] · 조성사업 실시설계용역 준공 [2024. 12. 19.]
2025	1분기	· 계약 및 착수 [2024. 3. 26.]
	2분기	· 준공 [2025. 6. 23.]

□ 기대효과

❍ 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사진