약속Ⅳ	활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.
북면도시공원 야간 경관 조성사업
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅳ-2	도시	주민안전은 더 세심하게		가평군	계속		단기		임기 내
추진부서	건설도시국		도시과	도시개발팀장	전창영(2370)		담당자		임재범(2371)
추진현황	■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		100%

□ 추진방향

❍ (필요성) 수려한 자연경관으로 다수의 관광객이 방문하고 있는 북면지역 내 도시공원에

대하여 관광명소로 조성하여 날로 침체되는 지역경제 활성화에 기여

❍ 북면 행정복지센터와 인접한 목동 근린공원에 대하여 지역주민의 휴식처와 더불어

관광명소로 거듭날 수 있는 계기 마련

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2021. 4. ~ 2024. 4.

❍ 사업위치: 북면 목동리 목동근린공원 일원

❍ 사업규모: 야간경관시설이 접목된 타워전망대 설치 1개소(H=30m, D=18m)

❍ 소요예산: 5,036백만원(공사비 4,836 / 설계·감리비 200)  ※ 공사비 증가에 따른 당초대비 36백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,036	3,000	2,036		2,036
국비
도비	2,800	2,800
군비	2,236	200	2,036		2,036
기타

❍ 사업내용
• 관광휴게실(관망탑) / 지상 1층 (건축면적=212.61㎡, 연면적=212.61㎡)

• 관광조명 설치 1식 (LED등 43개 설치)

• 엘리베이터 1개소, 그네 설치 2개소, 난간 및 게이트 설치

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	100
2023		‧ 2023. 4: 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치 ‧ 2023. 5: 경관조명 및 엘리베이터 설치 ‧ 2023. 6: 주공정 완료 ‧ 2023.10.: 부대시설 설치 후 사업완료	100	100
2024		‧ 2024. 4.: 도색작업 등 마무리 공정 진행 후 사업완료

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	2분기	· 전망대 설치 전체분, 1차분 계약체결
	3분기	· 1차분 공사 착공, 전기공사 계약체결 및 착공
2023	2분기	· 기초 설치 완료, 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치
	4분기	· 전망대 주요 철골구조물 및 부대설비 등 설치
2024	1분기	· 마무리 도색작업 진행 · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(2021. 4. ~ 2023. 6. → 2024. 4.) - 사유: 진입로 설치, 데크계단 설치 및 공사 중지에 따른 사업기간 변경
	2분기	· 사업 준공 · 안내판, 미끄럼방지 패드 등 안전시설물 설치공사 실시
	3분기	· 전망대 시설물 개방

□ 기대효과

❍ 목동 근린공원 내 야간경관시설이 접목된 전망대 설치를 통한 지역 명소 조성으로

관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사진