약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.
상수도 사회기반시설 증진
관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-11	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	상수도사업소		수도시설팀장	김중열(4420)		담당자		조진석(4421)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률		75%

□ 추진방향

❍ 지역개발에 필수요소인 상수도의 시설용량 부족으로 지역발전 저해요소로 대두되고 있음

❍ 이에, 수도정비기본계획에 따라 가평군 통합 취·정수장 3,000㎥/일 증설계획임

(향후 2030년까지 7,000㎥/일 추가증설)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023. 6. ~ 2026. 12.

❍ 사업위치: 가평통합취·정수장(가평읍 달전리 산 55-4번지)

❍ 사업규모: 가평통합정수장 취·정수시설 증설(19,000㎥/일 → 22,000㎥/일)

❍ 소요예산: 18,059백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	18,059		18,059		1,000		4,582	12,477
국비			-
도비	14,500		14,500				3,700	10,800
군비	3,559		3,559		1,000		882	1,677
기타			-

❍ 사업내용: 3,000㎥/일 증설(시설용량: 19,000㎥/일 → 22,000㎥/일)

1. 방사상집수정 2개소 개발(22,000㎥/일)

2. 정수장 시설 부분 증설 등(배수지 등)

3. 건설사업관리용역 1식(18개월)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	75
2023	실시설계용역 추진	‧ 수도정비기본계획 승인(환경청) ‧ 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 착수	10	10
2024	설계완료 및 공사 발주	‧ 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 준공 ‧ 가평통합 취정수장 증설공사 인가추진 및 발주	40	40
2025 ~ 2026 상반기	공사 시행	‧ 일반수도사업인가 ‧ 취수시설 증설공사 착공 및 공사 진행 ‧ 정수시설 증설공사 착공 및 공사 진행	50	25
2026 하반기~	공사 준공	‧ 최정수장 공사 진행 ‧ 시설 시운전 및 준공	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2023	1분기	· 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합 취·정수장 증설공사 실시설계용역 계약업체 입찰 의뢰(조달청)
	2분기	· 용역업체 계약체결 · 실시설계용역 착수
	4분기	· 하천점용허가(원주지방환경청)
2024	1분기	· 시추조사 및 착정조사 완료
	2분기	· 경기도 지역균형발전사업 공모 신청(선정)
	3분기	· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2023. 6. ~ 2026. 1.→2026. 6.), 소요예산(1단계), 사업내용(증설 10,000톤 → 1단계 3,000톤 / 2단계 7,000톤) - 사유: 수도정비기본계획에 따른 단계별 사업 추진에 따라 1단계 반영
	4분기	· 취수시설 증설공사 및 건설사업관리용역 입찰의뢰(조달청) · 일반수도사업인가(한강유역환경청)
2025	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 - 사유: 예산 교부 지연으로 사업 적기 추진에 어려움이 예상되어 변경 · 취수시설 공사 착공 및 추진
	2분기	· 가평통합취정수장 증설사업 건설사업관리용역 착수/ 2025. 4. 11.

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 자라섬 연내 행사진행으로 인한 공정 추진에 어려움이 예상되어 행사 관계부서와 지속적인 협의 및 공정만회로 사업 적극추진

□ 기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급에 따른 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

□ 위치도