약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.
국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-4	건설	주민안전은 더 세심하게		국토부	계속		장기		임기 외
추진부서	건설도시국		건설과	도로시설팀장	이진어(2425)		담당자		김경태(2428)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		35%

□ 추진방향

❍ 국도75호선‘가평~목동’구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 행락철 및

주말마다 만성적인 교통 체증으로 인해 지역 주민들이 생활에 큰 불편을 겪고 있어 기존 국도 확장 및 개량 사업 추진이 절실한 상황임

❍ 「제5차 국도․국지도 5개년계획」에 반영되어 현재 추진 중인「국도 75호선(가평-목동) 확장사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 적극적인 업무협의를 통해 가평군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 필요성과 당위성에 대하여 적극 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2018 ~ 2035 ※ (공약실천계획서: 2018　~ 2030) 사업 전체 완료시점 기준

❍ 사업위치: 가평읍 마장리 농업기술센터 진입로 입구 ~ 북면 목동리 목동삼거리

❍ 사업규모: 연장(L)=7.3km, 폭원(B)=15.0m

❍ 소요예산: 40,000백만원 (국비 100%)

❍ 사업내용: 국도75호선 확장 및 개량

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	35
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	‧ 국도75호선 4차로 확장사업 타당성 조사 및 검토	10	10
2025	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	‧ 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	20
2026	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	‧ 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	5
2027	편입용지보상 추진	‧ 편입용지보상 추진	20
2028	편입용지보상 완료, 공사 추진	‧ 편입용지보상 완료 ‧ 공사 추진	30

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 사업계획 변경 건의(가평군→국토부장관, 국토위 국회의원, 지역구 국회의원)
2023	1분기	· 당정협의회 건의 · 사업 조속 추진 건의(가평군→서울지방국토관리청)
	2분기	· 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원) · 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도) · 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의 · 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의 · 당정협의회 건의
	3분기	· 국토부 방문 건의
	4분기	· 국회 방문 건의(2회)
2024	1분기	· 국회 국토교통위원회 방문 건의 · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(~2028 → 2030) 및 연도별 목표 - 사유: 예산 미확보됨에 따라 연도별 목표 달성에 차질이 발생하여 사업기간 변경
	3분기	· 국회 방문 건의(3회)
	4분기	· 서울지방국토관리청 방문 건의 ※ 25년도 국토교통부 예산에 기본 및 실시설계용역비(2억원) 확보
2025	1분기	· 기본 및 실시설계용역 발주(서울청)
	2분기	· 기본 및 실시설계용역 착수(서울청)

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 국도75호선 가평~목동 구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 국토교통부에서 확정한 2차로 개량사업으로 추진 시 만성적인 교통체증 해소에 대한 근본적인 해결책이 될 수 없고 장기간 고통 받고 있는 가평 지역 주민들의 생활 불편을 조속히 해소하기 위해 신속한 사업추진이 절실한 상황임.

❍ 이에, 가평군에서는 사업효과의 극대화를 위해 서울지방국토관리청에서 기본 및 실시설계용역 추진 시점에 마장리부터 노루목고개 3.7km 구간만 우선 4차로 확장사업으로 변경하는 안을 건의할 계획임.

구 분		향 후 계 획	비 고
2027	1분기	· 기본 및 실시설계용역 준공(예정)
2027	3분기	· 용지보상 협의 추진(예정)
2028	4분기	· 공사 착공(예정)
2035	4분기	· 공사 준공(예정)

□ 향후계획

□ 기대효과

❍ 기존 국도 확장을 통한 만성적 교통 체증 및 통행 불편 해소.

❍ 지역 간 접근성 향상으로 지역경제 활성화를 도모하고 주민 편의 증진.

❍ 제2경춘국도 통과노선 배제에 따른 가평읍, 북면 지역주민들의 불만 해소.

□ 위치도 및 노선도