약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.
읍면별 도심지 주차장 확충 추진
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-7	교통	주민안전은 더 세심하게		가평군	계속		장기		임기 외
추진부서	건설도시국		교통과	교통시설팀장	김태랑(2259)		담당자		은지혜(2281)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		85%

□ 추진방향

❍ 읍면 도심지 내 부족한 주차 공간 확보를 통하여 원활한 교통 소통과 주민불편 해소

❍ 주민의견과 이용객의 접근성을 고려한 주차장 입지 선정 후 절차 진행

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026

❍ 사업위치: 관내

❍ 사업규모: 읍면별 도심지 주차장 조성

❍ 소요예산: 23,016백만원 ※※ 보상비 증가, 사업계획 변경 등에 따른 당초대비 2,172백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	23,016	1,675	21,341	5,471	5,611	3,219	3,649	3,391
국비
도비	8,649	1,500	7,149	2,500	3,649	1,000	-	-
군비	14,367	175	14,192	2,971	1,962	2,219	3,649	3,391
기타

❍ 사업내용 ※ 총사업비(보상비 / 공사비)

구 분	사업명	사업기간	사업위치	총사업비(백만원)	사업규모
계			5개소	23,016 (보상비 / 공사비)	부지면적 : 19,292㎡ 주차면수 : 462대
가평읍	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성	2022 ~2024	가평읍 대곡리 243-14 일원	2,910 (2,215 / 695)	부지면적 : 2,852㎡ 주차면수 : 43대
	경춘선 폐선부지 (레일바이크) 옆 공영주차장 조성	2023 ~2026	가평읍 읍내리 354-5 일원	4,591 (2,950 / 1,641)	부지면적 : 3,709㎡ 주차면수 : 107대
청평면	청평 공영주차장 (1구역) 조성	2022 ~2024	청평면 청평리 455-13 일원	5,345 (3,791 / 1,554)	부지면적 : 2,980㎡ 주차면수 : 60대
	청평 공영주차장 (2구역) 조성	2022 ~2024	청평면 청평리 79-133 일원	4,255 (2,632 / 1,623)	부지면적 : 6,586㎡ 주차면수 : 165대
조종면	조종면 시가지 공영주차장 조성	2022 ~2026	조종면 현리 274-54 일원	5,915 (4,024 / 1,891)	부지면적 : 3,165㎡ 주차면수 : 87대

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	85
2022 하반기	실시설계	‧ [청평 2구역] 실시설계용역 착수 ‧ [어린이음악놀이터] 부지 매입 및 실시설계용역 착수	10	10
2023	착공 및 실시설계	‧ [청평 1구역] 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 국유지(2필지) 토지보상, 공사 착공 ‧ [청평 2구역] 국유재산 매입 협의, 실시설계용역 및 실시계획인가 완료, 공사 착공, (토목)공사 준공 ‧ [어린이음악놀이터] 실시설계용역 완료 및 공사 착공 ‧ [레일바이크] 군계획시설결정 및 실시설계용역 착수 ‧ [조종면 시가지] 군계획시설결정 및 실시설계용역 착수	40	40
2024	준공 및 실시설계	‧ [청평 1구역] 공사 준공 ‧ [청평 2구역] 공사 준공 및 국유재산 매입 완료 ‧ [어린이음악놀이터] 공사 준공 ‧ [레일바이크] 군계획시설결정 및 실시설계용역 완료	20	20
2025 ~ 2026 상반기	실시계획인가 및 보상 협의	‧ [레일바이크] 실시계획인가 및 보상 협의 ‧ [조종면 시가지] 실시계획인가	30	15
2026 하반기~	보상 추진 및 공사 진행	‧ [레일바이크] 보상 추진 및 공사 진행 ‧ [조종면 시가지] 보상 추진 및 공사 진행	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적					비고
		가평읍		청평면		조종면
		어린이음악놀이터	레일바이크	1구역	2구역	시가지
2022	4분기	· 실시설계 용역 착수
2023	1분기	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 180백만원)			· 실시설계 용역 착수
	2분기	· 실시설계 용역 완료 · 공사 착공				· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수
	3분기			· 경기도 계약심사 완료 · 공사 착공
	4분기	· 조성공사 (통신)준공	· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수		· 공사(토목) 준공
2024	1분기	· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19. - 내용: 구역별 사업기간, 사업규모, 소요예산 - 사유: 행정절차 이행 기간 및 사업 규모 변경
		· 조성공사 (토목)준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)		· 공사(통신) 준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)
	2분기		· 군계획시설 (주차장) 결정 및 고시	· 공사(전기) 준공		· 주민설명회 개최
				· 공사(통신) 준공 · 공사(토목) 준공
	3분기					· 군계획시설 (주차장) 결정 입안
	4분기	· 조성공사 (전기)준공	· 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가 신청	· 군계획시설 (변경)인가 고시 · 연결계단 설치공사 준공
2025	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획 - 사유: 토지 매입비 예산 미반영, 주민 의견 수렴에 따른 행정절차 기간 소요
						· 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가신청 · 보상계획 공고
	2분기					· 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가고시 · 보상협의(1차)

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 경춘선 폐선부지(레일바이크) 옆 공영주차장: 군 세입 감소 등으로 예산확보 한계

⇒ 공약 목표연도(2025→2026)를 변경하고 추후 보상비 확보 등 예산 상황에 맞춰 사업을 지속 추진

❍ 조종면 시가지 공영주차장: 사업추진 중 민원 발생 및 토지매입 협의 지연

⇒ 주민의견 수렴 및 손실보상 절차 등 행정절차 이행시기를 고려하여 공약 목표연도(2025→2026) 변경

□ 향후계획

❍ 「주차장법」 제3조에 따른 주차장 수급 실태조사 결과와 읍·면 주차장 조성 건의사항 등을 검토하여 그 외 도심지 주차장 추가 확충

□ 기대효과

❍ 공영주차장 조성으로 도심지 주차난 해소를 통한 주민 불편 해소

□ 사진

가평읍 어린이음악놀이터 옆
가평읍 레일바이크 인근
청평면 1구역(청평농협 뒤)
청평면 2구역(중앙내수면연구소 옆)
조종면 시가지(조종초교 앞)