약속Ⅴ	도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.
청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅴ-8	도시	주민안전은 더 세심하게		가평군	계속		장기		임기 외
추진부서	건설도시국		도시과	도시재생팀장	공중식(2460)		담당자		박성호(2461)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		88%

□ 추진방향

❍ 역세권 기반시설 조성사업의 현실적 재정여건 및 주변상황을 고려하여 주요도로 우선 시행

❍ 역세권 지구단위계획 재정비 결과로 단계별 집행계획에 따라 사업추진

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2027

❍ 사업위치: 청평역·상천역 신역사 일원

❍ 사업규모: 청평: 도로 3개소(L=1,130m), 상천: 도로 1개소(L=650m)

※ 청평: 도로 2개소(L=550m) 공사완료, 도로 1개소(L=580m) 보상중

※ 상천: 도로 1개소(L=650m) 보상중

❍ 소요예산: 37,450백만원(청평: 23,200, 상천: 14,250)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	37,450	23,940	9,560	1,000	1,500	2,060	2,000	3,000	3,950
국비
도비
군비	37,450	23,940	9,560	1,000	1,500	2,060	2,000	3,000	3,950
기타

❍ 사업내용

• 지구단위계획 구역 내 주요 간선도로를 조성하여 지역개발 활성화

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획			목표이행률	공정률
계					100	88
2022 하반기	실시계획인가 고시	‧ 청평 중로2-5호선 공사 완료 ‧ 연말까지 보상계획 공고			5	5
구 분		청평 중로 2-1호선	청평 중로 2-7호선	상천 중로 1-8호선
2023	보상 추진	· 보상 완료		· 보상 추진	10	8
2024	보상 및 공사추진	· 공사 완료	· 보상 추진	· 보상 추진	25	25
2025 ~ 2026 상반기	보상 추진 행정절차 및 설계 등		· 보상 추진 · 행정절차완료	· 설계 완료	60	50
2026 하반기~	보상 추진		· 보상 추진	· 보상 추진	-

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적				비 고
		청평 중로 2-5호선	청평 중로 2-1호선	청평 중로 2-7호선	상천 중로 1-8호선
2022	2분기	준공
2023	2분기		손실보상 협의 요청(2·3차)
	3분기		수용재결 신청
	4분기		보상 완료
2024	1분기		착공	손실보상 협의 요청(1차)	보상 추진 (일부필지 보상완료)
		· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(~2025 → 2027), 사업규모(중로3-2호선 제외), 소요예산 - 사유: 주민 의견 적극 수렴 및 지역 접근성과 이동 편의성을 향상시키고자 내부도로(중로3-2) 제외 및 외곽순환도로 우선 개설
	2분기			일부토지 보상완료 (6필지)	일부토지 보상완료 (2필지)
	3분기		준공	소규모재해영향평가·환경영향평가 착수
	4분기			소규모재해영향평가 완료
2025	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 연도별 추진계획 - 사유: 재정 여건으로 인한 예산 미반영으로 사업 추진 시기 조정
				일부토지 보상완료(1필지)

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 2025년 상천 역세권 예산 미반영으로 추경 확보 예정

□ 향후계획

❍ 청평 상천 역세권 공사 완료(2027. 12.)

□ 기대효과

❍ 기반시설 확충을 통한 지구단위계획구역 내 발전의 기틀 마련

❍ 도시계획도로 장기 미집행시설 해소로 인한 주민들의 불편해소

□ 위치도(청평)

청평역

(구)내수면연구소

청춘역 1979

계획구간

□ 위치도(상천)

상천역

경로당

상천초

계획구간