약속Ⅵ	군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.
파크골프장 확충
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅵ-3	체육	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		중기		임기 내
추진부서	경제산업국		문화체육과	문화체육시설팀장	염한식(2510)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		62%

□ 추진방향

❍ 파크골프장 조성으로 문화체육인프라를 확충하여 지역주민 삶의 질 향상

❍ 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화 체육활동 등 건전한 여가활동 제공

❍ 지역별 균형 있는 문화·체육시설인프라 구축

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.

❍ 사업위치: 가평읍, 청평면, 설악면, 북면

❍ 사업규모: 파크골프장 4개소(신규3, 확충1)

❍ 소요예산: 6,570백만원 ※ 설악파크골프장 관급자재 추가구입으로 100백만원 군비증액(25년 1회 추경)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	6,570		6,570		1,110	860	4,600
국비
도비	1,590		1,590				1,590
군비	1,880		1,880		110	160	1,610
기타	3,100		3,100		1,000	700	1,400

❍ 사업내용

시설구분	위치	규모	비고
계	4개소
파크골프장	가평읍 달전리 275번지 일원	18홀	신규
파크골프장	설악면 창의리 501-4	9홀	신규
파크골프장	북면 소법리 627번지 일원	9홀	신규
파크골프장	청평면 대성리 산 2-1번지 일원	27홀	확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	62
2022 하반기	사업대상지 선정	‧ 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정	5	5
2023	실시설계	‧ 파크골프장 3개소(가평, 청평, 설악) 실시설계	20	20
2024	실시설계 및 하천점용허가 협의	‧ 파크골프장 4개소 실시설계 ‧ 하천점용허가 신청 및 협의	30	30
2025	사업완료	‧ 파크골프장 4개소 공사 착공 ‧ 파크골프장 4개소 공사 준공	45	7

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적				비 고
		가평읍	청평면	설악면	북면
2022	3분기	· 사업대상 후보지 현장 확인 · 사업대상지 추천 요청(문화체육과→6개 읍면) · 가평군 파크골프협회 협의
	4분기				· 북면 파크골프 및 그라운드골프협회 협의(그라운드 골프장 → 파크 골프장)사업 변경
2023	1분기	· 원주지방환경청 협의(2회)(대상 부지)
	2분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수
		· 공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11. - 내용: 명칭 및 사업규모(그라운드골프장 1개소 제외, 파크골프장 1개소 추가) - 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영
	3분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 중지 (하천점용허가 협의 등 행정절차 진행)
	4분기			· 조성사업 수리검토 · 실시설계용역 착수
2024	1분기	· 원주지방환경청 협의(3차)(대상 부지) · 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수 · 한수원 부지 사용허가 요청		· 인접 토지주 및 야영장 운영인 의견수렴	· 대상지 선정
	2분기	· 용역중지 (수질오염총량 및 소규모환경영향 평가 협의 등)	· 진출입로 개선 관련 도로교통 공단 경기도지부 기술지원 요청
	3분기	· 하천점용허가 신청 및 보완요청	· 진출입로 협의 요청(의정부국토 관리사무소)	· 낙찰자 및 업체 선정	· 실시설계용역 중지(기하천점용 허가취소절차이행)
	4분기	· 소규모영향평가 협의 요청	· 청평 파크골프장 진출입로 개선 방안 협의 요청 (의정부국토 관리사무소)	· 기하천점용허가 취소에 따른 원상복구(건설과 하천관리팀)	· 기하천점용허가 보상관련 법률자문 및 결과통보 (문화체육과 → 북면, 건설과)
2025	1분기	· 하천점용허가 보완자료 제출 (문화체육과→ 원주지방환경청)	· 청평 파크골프장 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)	· 하천점용허가 등 행정절차 완료	· 기하천점용허가 취소 및 원상복구 진행(북면)
	2분기	· 하천점용허가 보완자료 제출 (문화체육과→ 원주지방환경청)	· 청평 파크골프장 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)	· 공사 착공(4월)	· 설계용역 재착수

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 가평읍 파크골프장

⇨ 국가하천에 대한 점용허가를 위해 원주지방환경청에 협의한 결과 이동식 건축물(클럽하우스, 화장실) 및 구조물(파고라, 의자)등에 대한 이동계획 수립 요청(보완)이 있어 건축물 및 구조물을 최소화하고 이동계획을 수립하여 2025.3.31.일 보완자료 제출하여 원주지방환경청에서 2025. 6. 16일부로 하천점용허가 및 실시계획인가 완료하였음.

❍ 청평면 파크골프장

⇨ 파크골프장 진출입차량과 신청평대교 진입차량 간 교차로 인해 교통사고 발생 우려가 상존하고 있음에 따라 4지교차로 설치를 검토하였으나, 원주지방환경청과 하천점용허가 사전검토 협의결과 4지교차로에 대하여 부정적인 의견이 있어 기존 진출입로를 개선하는 방안으로 의정부국토관리사무소 협의완료(24. 12. 31)하였음.

⇨ 하천점용허가 신청을 위해 원주청에 방문(25.2.5)하여 사전협의하였고, 원주청 담당자가 사업대상지를 방문(3.10)하여 현장 실사하였으며 25.5월 국민권익위원회 주관 파크골프장 정비요구 등에 따라 국민권익위원회에서 조성서 의견을 7월에 제출할 예정이며, 이후 원주지방환경청에 하천점용허가 신청 예정임.

❍ 북면 파크골프장

⇨ 기 하천점용허가자가 보상(수목 등)을 요구하고 있어 취소 및 원상복구 등 행정절차 이행을 위해 설계용역 중지(24.8.13)하였으나, 25. 6월 기 하천점용허가자가 본인이 점용허가 받기 전 기 조성된 수목으로 소유권 주장을 번복하였고, 주민의견 및 과거 항공사진 등을 검토한 결과 하천점용 이전에 식재된 수목으로 확인되어 필요한 수목은 재사용하고 나머지 지장물은 폐기물처리내역에 포함하여 설계용역 및 하천점용허가를 완료 예정임.

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	3분기	· 실시설계 및 하천점용 등 행정절차 이행(가평읍, 청평면, 북면) · 공사 착공(설악면)
	4분기	· 파크골프장 4개소 착공 및 조성완료

□ 기대효과

❍ 파크골프장을 조성하여 군민의 건강증진에 기여함은 물론 건전한 여가활동 제공을 통해 군민의 삶의 질 향상 도모