약속Ⅵ	군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.
상면 생활문화체육시설 및 공간조성
관리번호	분야	중점 추진과제		사업주체	신규여부		사업시기		완료시기
Ⅵ-4	체육	지역문화는 더 다채롭게		가평군	신규		장기		임기 외
추진부서	경제산업국		문화체육과	문화체육시설팀장	염한식(2510)		담당자		이선명(2072)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기						공정률		47%

□ 추진방향

❍ 다목적 생활문화공간 조성으로 양질의 문화 공간 제공을 통한 지역주민의 복지 증진 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 12. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2025. 12.

❍ 사업위치: 상면 연하리 136-3번지 일원

❍ 사업용도: 문화센터, 공연장, 체육시설(종합행정타운) 등

❍ 소요예산: 5,200백만원(보상비 2,200백만원, 시설비 3,000백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390
국비
도비
군비	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390
기타

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추 진 계 획	목표이행률	공정률
계			100	47
2022 하반기	사업대상지 선정	‧ 시설의 필요성, 수혜도 등을 종합적으로 고려한 세부사업 계획 확정	5	5
2023	토지보상	‧ 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 12월	10	10
2024	실시설계	‧ 군관리계획 변경 및 실시설계 : 6월 ~ 12월	25	25
2025	실시설계 완료 및 토지매입	‧ 군관리계획 변경 및 실시설계 : 1월 ~ 12월 ‧ 편입토지 손실보상 협의 : 7월 ~ 12월	20	7
2026	공사준공	‧ 공사 착공 : 3월 ‧ 공사 준공 : 12월	40

□ 추진실적

구 분		추 진 실 적	비 고
2022	3분기	· 주민의견 수렴 제출 요청(문화체육과→상면) 및 주민 회의 개최
2023	1분기	· 주민건의(상면청사신축)에 대한 의견제출 요청(문화체육과→회계과) ※ 면청사 이전 – 별도 검토 추진(회계과) · 편입토지(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료 · 부서의견 회신(회계과→문화체육과)
	3분기	· 편입 물건(상면 연하리 136-5번지, 분묘3기)손실보상협의 요청
2024	2분기	· 편입토지 물건(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료
	3분기	· 군관리계획 결정, 실시설계 용역 의뢰 및 착수
2025	1분기	· 주민설명회 개최 및 의견청취(1. 17)
	2분기	· 2차 주민설명회 개최 및 의견청취(6. 20)

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 2차 주민설명회를 개최(25. 6. 20)하여 사업대상지 인근 주거지 주민들의 다수민원(생활권침해 등) 의견을 청취하고 수렴한 결과 대상지 인근 부지를 추가 확보하여 진입로를 상면행정복지센터 뒤쪽이 아닌 사업부지 넘어 반대편으로 진입하는 것으로 결정하였고, 세부시설 계획은 설계(안)인 테니스장 및 공연장으로 확정하지 않고 상면에서 주민 전체의 의견을 절충한 후 설계에 검토‧ 반영할 예정임.

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	3분기	· 사업부지 내 세부시설 확정(상면) · 편입토지 손실보상 협의(~25.9월)
2026	2분기	· 공사 준공

□ 기대효과

❍ 다목적 생활문화공간을 조성하여 양질의 문화공간을 제공하여 군민의 복지증진 및 삶의 질 향상